∙ ∙ ∙ ∙ • • •

• • • ∙ ∙ ∙ ∙

	부산 KF94 마스크 생산계획서

2020년 12월 1일 기준

Ⅰ. 개요

1. 위치

- 본점 : 서울시 여의도동 / 서울 사무소 : 서울 강남구 논현동

- 제1공장 부산1공장 : KF94 마스크 및 덴탈 마스크

- 제2공장 부산2공장 : KF94 마스크

- 제3공장 충북공장 : KF94 생산공장

- 제4공장 : 식약처 인증공장 (KF94, KFAD, 덴탈)

2. 마스크 인증 : FDA인증 , KC인증, 식약처 인증

Ⅱ. 핵심공장 생산계획

1. 부산 제1공장

- 현재상황 : 계약시 즉시 생산가능

- 대지 : 1350평, 연면적 1800평, 건평 600평, 원부자재창고 400평, 완성품창고 2500평

- 덴탈마스크 성형기 23대(분당 300장) /  - 귀편 융착기 85대(분당 100장)

- 생산량 : 현재 덴탈마스크 연 15억장 생산가능 /

- 전력 : 6,000KW / - 3면 열수축 포장기, 소포장기 보유

부산 제1공장 생산준비 타임 스케줄
순위	세부프로젝트	기간	세부내역	비고
１	부산공장 마스크 본계약	Day 1	- 덴탈 고속기 23대, 융착기 85대 기계 생산분 KF94 기계 100대 생산분	-연간생산 덴탈15억장 -연간생산 KF94 20억장
2	마스크 스펙 준비	Day 1-Day 7	- 마스크 소박스 및 대박스 준비 - 원단 부자재 준비 - 물류 준비	-바이어요구 스펙 준비
3	덴탈마스크 생산	Day 8 ~	- 품질관리, 인력관리, 생산관리, 위생 초점	-전사적 지원
4	KF94 기계 입고	Day 8~ Day 15	- KF94 100대 공장입고 및 설치 - 시운전 생산완료	-15명 중국기술진
5	작업인력채용	Day 1-Day 15	- 작업인력 700명 채용	-모든 역량 투입 -인력업체 활용
6	마스크 생산확대	Day 15 ~	- 덴탈 및 KF94 기계 추가도입	-연간생산량 확대

2. 부산 제2공장

- 현재상황 : KF94 200대 및 덴탈일체형 200대 구매 완료(구매 계약서 및 영수증 있음)

- 공장 대지 : 3500평, 연면적 6900평, 건평 2300평, 원부자재창고 및 완성품창고

- 1층 2300평, 2층 2300평, 3층 2300평  /  - 지목 : 공장용지, 마스크생산 가능업종

부산2공장 500대 생산준비 타임 스케줄
순위	세부프로젝트	기간	세부내역	비고
１	부산공장 마스크 본계약	Day 1	- KF94 기계 500대 생산분	-연간 총생산량 100억장
２	생산환경 조성	Day 1 ~ Day 20	- 1층 크린룸 2100평 / 사무실 200평 - 2층 크린룸 2100평 / 사무실 200평 3층 크린룸 1300평 / 원부자재보관실 1000평 완제품 보관창고 건설	-국내최고 전문가 투입
３	마스크 스펙 준비	Day 1 ~ Day 10	- 마스크 소박스 및 대박스 준비 - 원단 부자재 준비 - 물류 준비	-바이어요구 스펙 준비
４	부가적 생산 기계 설치	Day 10 ~ Day 20	- 대박스 포장기 - 비닐 포장기	-전사적 지원
５	1차 KF94 기계 입고	Day 10 ~ Day 20	- KF94 기계 200대 공장 입고 및 설치 - KF94 마스크 시험생산 시작	-연간 40억장
６	2차 KF94 기계 입고	Day 20 ~ Day 35	- KF94 기계 200대 공장 입고 및 설치 - KF94 마스크 시험생산 시작	-연간 40억장
７	3차 KF94 기계 입고	Day 35 ~ Day 50	- KF94 기계 100대 공장 입고 및 설치 - KF94 마스크 시험생산 시작	-연간 20억장
８	KF94 마스크 생산	Day 20 ~	- 품질관리, 인력관리, 생산관리, 위생 초점	-모든 역량 투입
９	작업인력채용	Day 1 ~ Day 30	- 작업인력 1000명 채용	-모든 역량 투입 -인력업체 활용

3. 충북공장

- 공장규모 : 대지 2500평,  크린룸 1200평

- KF94 84대 보유 및 생산중

- 생산량 : KF94 연 15억장 가능 / 전력 : 5,000KW

4. 인증공장

- KF94, KFAD, 덴탈 인증공장 보유함, 식약처 인증공장

5. 추가사항

- 최상급 중국엔지니어 수십명 상시보유

- 부품만드는 기계 2대 보유 (고장시 직접 금형과 부품을 제조함)

- 엔지니어 및 생산관리 인력관리 상시 지원

- 계약하는 마스크의 구체적 스펙, 구체적 수량, 제품 납기일, 실제 본계약일 등에 대한 정보를 요청

- 상호 신뢰를 위해 바이어와의 계약서류를 공개하고 협력방안 논의를 요청